Договор о проведении капитального ремонта № ___/2024
город Владимир			          	                                                                                            ______/ ________/ 2024 год 

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области», в лице заместителя генерального директора Семина Алексея Викторовича, действующего на основании доверенности                           от 05.12.2023 г. № 105, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
  __________________, в лице ____________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 01 июля 2016 г. № 615, на основании протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе/протокола проведения электронного аукциона от ____ ___________ 2024 г.,                      № __________, заключили настоящий Договор о нижеследующем.   

 1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту (далее – Работы) общего имущества многоквартирного дома (далее - Объект), указанного в Приложении № 1 к настоящему Договору, в установленные Договором сроки, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и оплатить обусловленную Договором цену. 
Наименование, объем, содержание Работ определяются проектно-сметной документацией, прилагаемой к Техническому заданию, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 6).
1.2. Подрядчик выполняет Работы своими или привлеченными силами/средствами, а также с использованием собственных материалов, транспорта, машин, механизмов, технических средств, оборудования, инструмента и другого инвентаря.
1.3. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что:
	несет полную ответственность за выполнение Работ по настоящему Договору и Приложениями к нему,
	полностью понимает и осознает характер и объемы Работ, принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные                   с выполнением Работ,
	получил и изучил условия Договора, включая все приложения к нему, проектно-сметную документацию и получил полную информацию по всем вопросам,
	проектно-сметная документация сформирована в объёме, необходимом и достаточном для выполнения Работ надлежащего качества.
2. Сроки выполнения Работ
2.1. Весь объем Работ, предусмотренный Договором, должен быть выполнен Подрядчиком в сроки, предусмотренные графиком производства работ, являющимся неотъемлемой частью Договора, но не позднее 25 декабря 2024 года включительно.
	Cроки начала и окончания Работ согласовываются Сторонами и утверждаются Заказчиком одновременно                        с подписанием Договора (Приложение № 2). 
2.2. Работы могут быть выполнены Подрядчиком досрочно, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора. 
2.3. Сроки выполнения Работ по Договору по соглашению сторон могут быть продлены на период действия одного из следующих обстоятельств при наличии документов, подтверждающих такие обстоятельства:
а) изменение объема выполняемых Работ по договору по соглашению сторон при согласовании таких изменений собственниками помещений в многоквартирном доме, уполномоченным представителем собственников таких помещений или органами местного самоуправления в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
б) недопуск собственниками помещений в многоквартирном доме Подрядчика к выполнению Работ по капитальному ремонту по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком Договора;
в) приостановка выполнения Работ в связи с наступлением отопительного сезона и (или) неблагоприятных погодных условий. 
2.4. В случае продления сроков выполнения Работ, Стороны согласовывают новый график производства работ (Приложение              № 2), подписывают дополнительное соглашение к Договору. При этом дополнительное соглашение заключается на момент предоставления подтверждающих документов и может распространять свое действие на отношения, возникшие до его заключения. Подрядчик также обязан продлить срок действия договора страхования, предоставив Заказчику экземпляр оригинала соответствующего дополнительного соглашения к договору страхования;  в случае избрания Подрядчиком способа обеспечения исполнения обязательств в виде независимой гарантии - предоставить в день подписания дополнительного соглашения об увеличении сроков выполнения Работ дополнительное обеспечение исполнения обязательств по Договору                     в виде независимой гарантии с соблюдением требований, установленных пунктами 4.6.-4.8. Договора. Оригинал документа, подтверждающего предоставление дополнительного обеспечения исполнения обязательств по Договору в виде независимой гарантии, становится неотъемлемой частью Договора и во избежание утери и порчи хранится у Заказчика до окончания срока действия Договора.
2.5. Подрядчик не имеет права на продление срока выполнения Работ в случае выполнения Работ, связанных с устранением недостатков (дефектов).
2.6. Заказчик имеет право приостановить выполнение Работ с указанием причин и сроков приостановления путем направления заказного письма, письма на электронный адрес, факсограммы, либо вручением лично в руки ответственным лицам Подрядчика. Возобновление Работ происходит с момента направления Подрядчику уведомления о возобновлении Работ путем направления заказного письма, письма на электронный адрес, факсограммы, либо вручением лично в руки ответственным лицам Подрядчика. Период приостановки Работ по письму Заказчика не входит в срок выполнения Работ и не облагается пенями, штрафами, за исключением случаев приостановки Работ Заказчиком и/или представителем строительного контроля по причине некачественного выполнения отдельных видов Работ либо применения некачественных материалов и оборудования, нарушения технологии выполнения Работ и т.д. 
2.7. В случае изменения в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта по соглашению Сторон из Договора может быть исключено выполнение Работ в многоквартирных домах, исключенных из краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта, с пропорциональным изменением цены Договора.

3. Стоимость Работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость выполняемых Работ составляет _____ (________) рублей _____копеек, с учетом НДС (источник финансирования - Взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений многоквартирных домов).  
Если победителем электронного аукциона является Подрядчик, применяющий специальный налоговый режим (без НДС), цена Договора может быть снижена на сумму НДС (без изменения объема работ, иных условий Договора) по соглашению Сторон путем подписания дополнительного соглашения в течение 1 рабочего дня с даты заключения Договора.  
Для Подрядчиков, применяющих специальный налоговый режим, включается компенсация НДС на материалы и оборудование. В случае если у Подрядчика, применяющего специальный налоговый режим (без НДС), в течение срока действия настоящего Договора возникает обязанность по уплате НДС, то Стороны определили, что расходы, связанные с компенсацией НДС по Договору, включены в цену, определенную п. 3.1 Договора.
Затраты по утилизации строительного мусора в актах выполненных работ по форме КС-2 подлежат обязательному подтверждению заверенными копиями договора с мусороперерабатывающим полигоном, акта выполненных работ с указанием количества и стоимости утилизации, а также талонов на утилизацию мусора.
В случаях, когда в соответствии с проектными решениями осуществляется разборка конструкций, то по конструкциям, материалам и изделиям, пригодным для повторного применения в актах выполненных работ по форме КС-2 указываются суммы возвратных материалов.
При осуществлении расчетов за выполненные Работы финансирование уменьшается на величину возвратных сумм. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты расходуется на дополнительные виды работ, с расшифровкой в смете на дополнительные объемы Работ, с учетом уровня текущих цен и с начислением дополнительных лимитированных затрат как по основной смете.
3.2. Расчеты по Договору осуществляются в рублях Российской Федерации.
3.3. Заказчик в течение 20 рабочих дней после подписания Договора вправе выплатить аванс Подрядчику в размере 15% от цены Договора, указанной в пункте 3.1. настоящего Договора в случае, если им выбран такой способ обеспечения исполнения обязательств по Договору как внесение денежных средств. 
Выплата Подрядчику аванса по Договору не производится в случае, если им выбран такой способ обеспечения исполнения обязательств по Договору как предоставление независимой гарантии. 
Несвоевременная выплата Заказчиком аванса, а также отсутствие авансирования не являются основаниями для невыполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Договора или изменения сроков выполнения Работ по Объекту и настоящему Договору в целом.
3.4. Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком за вычетом ранее оплаченного аванса путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 36 (тридцати шести) месяцев с даты утверждения Коллегией фонда акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписанного Заказчиком и согласованного уполномоченным представителем организации, осуществляющей строительный контроль; акта по форме КС-3, подписанного Заказчиком; счета, выставленного Подрядчиком; исполнительной документацией, сданной Заказчику. 
  Утверждение подписанных актов КС-2 и КС-3 осуществляется Коллегией Фонда в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания таких актов Заказчиком.
3.5. Счет на окончательную оплату выставляется по Объекту за вычетом ранее оплаченного аванса. 
3.6. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, не учтенных проектно-сметной и другой технической документацией по настоящему Договору, но без которых дальнейшее производство работ по Договору, а также эксплуатация многоквартирного дома не представляется возможными, то Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика и представить подробное описание дополнительных работ. Дополнительные работы производятся на основании Дополнительного соглашения к настоящему Договору и сметы на дополнительные работы в согласованные Сторонами сроки. 
3.7. Оплата Работ происходит путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем исполнения обязанности Заказчика по оплате выполненных Работ считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.8. Цена Договора может быть увеличена по соглашению Сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов                     в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения Работ. 
	Стоимость каждого из видов Работ по Договору не может превышать размер предельной стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, который определяется нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
3.9.  Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон при уменьшении предусмотренных Договором объемов Работ.
3.10. Изменение цены Договора оформляется дополнительным соглашением к Договору, подписанным Сторонами.                            Виды Работ не могут изменяться в ходе исполнения настоящего Договора. 
3.11. Стоимость Работ по Договору не может быть увеличена в ходе его исполнения в случае увеличения стоимости материалов и оборудования. 
3.12. Заказчик вправе удерживать оплату за выполненные Работы в полном объеме до выполнения Подрядчиком требований             п. 11.2 Договора. 

4. Обеспечение исполнения Договора 
4.1. Обеспечение исполнения обязательств по Договору составляет 15 % начальной (максимальной) цены Договора.
4.2. Исполнение обязательств по Договору обеспечивается предоставлением независимой гарантии или обеспечительным платежом путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения обязательств по Договору определяется Подрядчиком самостоятельно. Оригинал документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения обязательств в виде независимой гарантии, является неотъемлемой частью Договора и во избежание утери и порчи хранится у Заказчика до окончания срока действия Договора.
4.3. Обеспечение исполнения обязательств по Договору в случае внесения денежных средств производится путем перечисления денежных средств на счет Заказчика по реквизитам: Получатель - некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области», расчетный счет - 40603810900000000051, Банк - ГПБ (АО) в г. Москва, БИК - 044525823, корреспондентский счет - 30101810200000000823..
4.4. Обеспечение исполнения обязательств по Договору предоставляется Подрядчиком одновременно с подписанным с его стороны экземпляром Договора на срок исполнения обязательств по Договору Подрядчиком, при этом срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия обязательств по Договору не менее чем на 60 дней.
4.5. Требования к предоставляемому обеспечению исполнения обязательств по Договору установлены в разделе IV Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 г. № 615. Условия продления, изменения независимой гарантии установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 г. № 615. Обеспечение исполнения обязательств по Договору не распространяется на гарантийные обязательства. 
4.6.  Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени организации, выдавшей независимую гарантию (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством, и должна соответствовать следующим требованиям:
а) быть безотзывной;
б) требование к независимой гарантии может быть предъявлено гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению Заказчика в случае неисполнения участником электронного аукциона своих обязательств по Договору и (или) в случае расторжения Договора;
в) срок действия независимой гарантии должен превышать срок выполнения Работ по Договору не менее чем на 60 дней.
4.7. В независимой гарантии должно быть указано:
а) право заказчика представлять письменное требование к уплате денежной суммы и (или) ее части по независимой гарантии в случае неисполнения и (или) в случае ненадлежащего исполнения подрядной организацией своих обязательств, обеспеченных независимой гарантией;
б) право заказчика на передачу права требования к независимой гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
в) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежной суммы гарантом по независимой гарантии, несет гарант;
г) перечень документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием к осуществлению уплаты денежной суммы по независимой гарантии - расчет суммы, включаемой в требование к независимой гарантии;
д) сумма независимой гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона (в российских рублях);
е) безусловное право заказчика на истребование суммы независимой гарантии полностью или частично в случае неисполнения, и (или) в случае ненадлежащего исполнения подрядной организацией своих обязательств по договору о проведении капитального ремонта в предусмотренные сроки, и (или) в случае расторжения договора о проведении капитального ремонта;
ж) платеж по независимой гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 банковских дней после поступления требования бенефициара;
з) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
и) обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку за просрочку исполнения обязательств по независимой гарантии в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день допущенной просрочки;
к) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора независимой гарантии по обязательствам принципала, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта.
Изменения, вносимые в Договор, не освобождают гаранта от исполнения обязательств по независимой гарантии.
Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, должны разрешаться в судебном порядке.
4.8. Недопустимо включение в независимую гарантию:
а) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования к платежу по независимой гарантии в случае непредставления гаранту бенефициаром уведомления о нарушении принципалом условий Договора или расторжении Договора;
б) требований к предоставлению бенефициаром гаранту отчета об исполнении Договора;
в) условий или требований, противоречащих положениям пунктов 209 - 211 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615.
Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня ее поступления.
4.9. Обеспечительный платеж обеспечивает выполнение Подрядчиком обязательств, указанных в пунктах 11.2., 11.3., 11.5., 11.7., 11.10. и 11.11. настоящего Договора, при возникновении которых Заказчик вправе удержать из обеспечительного платежа денежные средства в соответствующей сумме.

5. Страхование 
5.1.	До начала выполнения строительно-монтажных работ на Объекте (согласно графику производства работ) Подрядчик передает Заказчику оригинал договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков (страховой полис)                          с указанием данных о страховщике, страхователе, выгодоприобретателях, застрахованных рисках и размере страховой суммы. 
5.2.	 Подрядчик страхует следующие виды рисков:
	5.2.1.  Риск случайной гибели или случайного повреждения Объектов в течение срока выполнения Работ - на сумму 100% от Цены Договора;
	5.2.2. Риск причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при выполнении Работ и в течение гарантийного срока - на сумму 20% от Цены Договора;
	5.2.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ в течение гарантийного срока - на сумму 100% от Цены Договора.
5.3.	 Объектом страхования по пп. 5.2.2. являются имущественные интересы Заказчика и Подрядчика, связанные с его обязанностью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возместить вред, причиненный жизни (смерть физического лица), здоровью (болезнь физического лица, причинение ему телесных повреждений) или имуществу (повреждение или уничтожение имущества, в том числе недвижимого (жилого, нежилого помещения, объектов общего пользования в жилом доме и т.д.), находящегося во владении и пользовании физических и/или юридических лиц, публично-правовых образований на праве собственности, оперативного управления, хозяйственного ведения, в найме, аренде, управлении и по другим законным основаниям, третьих лиц в связи с проведением строительно-монтажных Работ.
5.4.	 В договоре страхования должны быть предусмотрены следующие условия:
	5.4.1. выгодоприобретателями по пп. 5.2.2. должны являться пострадавшие третьи лица; 
	5.4.2. выгодоприобретателем по пп. 5.2.1. и 5.2.3. должен являться, в том числе Заказчик.
5.5.	 К числу страховых случаев должны относиться: 
5.5.1. по риску, указанному в пп 5.2.1.: 
- непреднамеренные нарушения строительных норм и правил, требований по технике безопасности должностными лицами Подрядчика, не несущими ответственность за их выполнение;
- ошибки при выполнении Работ, скрытые дефекты конструкций и материалов;
5.5.	2. по риску, указанному в пп. 5.2.2.:
- причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц от протечек и/или влияния влажной (мокрой) среды в результате выпадения атмосферных осадков (дождь, снег и т.д.) и их проникновения во внутренние полости и поверхности помещений и наружные конструкции имущества третьих лиц в результате проведения строительно-монтажных работ, если были проведены необходимые работы по временной защите объектов от проникновения жидкости на период строительно-монтажных работ. Оценка действий (бездействия) Подрядчика в данном случае должна подтверждаться заключением организации, осуществляющей строительный контроль на Объекте;
5.5.3. по риску, указанному в пп. 5.2.3.: 
- возникновение непредвиденных расходов Подрядчика и Заказчика, вызванных повреждением, уничтожением или утратой результата Работ, выполненного в рамках Договора, вследствие ошибок, допущенных Подрядчиком при нахождении на Объекте капитального ремонта в период гарантийного срока с целью устранения недостатков (дефектов) ранее произведённых строительно-монтажных Работ и (или) иных Работ в соответствии с его договорными обязательствами;
- повреждение, уничтожение или утрата результата строительно-монтажных Работ, выполненных по Договору,                           в результате недостатков (дефектов), допущенных при проведении строительно-монтажных Работ, но выявленных в период гарантийного срока.
5.6. Срок страхования по риску, указанному в пп. 5.2.1, должен превышать конечный срок выполнения строительно-монтажных Работ не менее чем на 3 (три) календарных месяца.
5.7. Срок страхования по рискам, указанным в пп. 5.2.2. и 5.2.3., должен включать в себя гарантийный срок на результат выполненных строительно-монтажных Работ.
5.8.	 Договор страхования гражданской ответственности не должен содержать ограничения лимита ответственности страховщика по сумме возмещения ущерба на одного пострадавшего и лимита ответственности страховщика по одному страховому случаю.
5.9.	 Установление франшизы по договору страхования не допускается. 
5.10.	Договором страхования должна быть предусмотрена возможность получения страховой выплаты не только по заявлению Подрядчика, но и выгодоприобретателей. 
5.11.	Срок выплаты страхового возмещения не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком или выгодоприобретателем соответствующего заявления в страховую компанию с приложением документов, подтверждающих наступление страхового случая, перечень которых должен быть определен договором страхования.
5.12.	Договор страхования должен содержать адресный перечень Объектов с указанием страховой суммы по каждому виду рисков.
5.13.	При наступлении страхового случая Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика о наступлении страхового случая.
5.14.	В случае изменения срока действия Договора, в частности по причине продления гарантийного срока,  или увеличения стоимости строительно-монтажных работ, Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания соответствующего дополнительного соглашения  обязан продлить срок действия договора страхования, предоставив Заказчику 1 (один) экземпляр оригинала соответствующего дополнительного соглашения к договору страхования с приложением заверенной копии платежного поручения, подтверждающего оплату страховой компании дополнительной страховой премии, в случае если это предусмотрено указанным документом.
5.15.	Если страхового возмещения окажется недостаточно для того, чтобы полностью компенсировать причиненный вред, Подрядчик обязан за счет своих средств возместить разницу между фактическим размером ущерба и страховым возмещением.
5.16.	Перед началом работ на Объекте Подрядчик обязан передать представителю собственников помещений в многоквартирном доме копию договора страхования.
5.17.	Подрядчик обязан принять все необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая, уменьшения его последствий и спасению застрахованного имущества.
5.18.	Страховая организация должна соответствовать следующим требованиям:
5.18.1. Наличие действующей лицензии на осуществление страхования, в том числе не находящейся в стадии ограничения либо приостановления, выданной уполномоченным государственным органом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на указанные в договоре виды страхования.
5.18.2.	На момент заключения договора страхования размер оплаченного уставного капитала страховой организации должен быть не менее 1 млрд. руб.
5.18.3.	Отсутствие (на момент заключения договора страхования) принятого в отношении страховой организации решения о ликвидации или определения суда о введении наблюдения или иной процедуры банкротства.
5.18.4.	Отсутствие (на момент заключения договора страхования) приостановки деятельности страховой организации в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
5.18.5.	Отсутствие на момент заключения договора страхования сведений о страховой организации в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц» и от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.18.6.	Соответствие на момент заключения договора страхования страховой организации требованиям и условиям осуществления страховой деятельности, установленным законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и иным действующим нормативным актам.
5.18.7.	Отсутствие на момент заключения договора страхования действующих предписаний Банка России к страховой организации по финансовой неустойчивости.
5.18.8.	Заемные средства страховой организации по состоянию на последний день каждого года в течение последних двух лет перед годом заключения договора должны составлять не более 5% от величины уставного капитала страховой организации.
5.18.9.	Переоценка имущества страховой организации по состоянию на последний день каждого года в течение последних двух лет перед годом заключения договора должна составлять не более 10% от величины уставного капитала страховой организации.
5.18.10.	Чистый убыток страховой организации по состоянию на последний день каждого года в течение последних двух лет перед годом заключения договора по МСФО не должен превышать 400 млн. руб.
5.18.11.	Фактический размер платежеспособности страховой организации должен превышать нормативный размер платежеспособности страховой организации по состоянию на последний день каждого года в течение последних двух лет перед годом заключения договора в 1,5 и более раза.
5.18.12.	Чистые активы страховой компании должны превышать уставный капитал.
5.18.13.	Страховая организация должна соответствовать рейтингу финансовой надежности страховой компании, выданный рейтинговым агентством АО «Эксперт РА», на уровне не ниже «ruAA».

6. Права и обязанности Заказчика
6.1. Заказчик обязан: 
6.1.1. Выдать в работу Подрядчику проектно-сметную документацию, необходимую для выполнения Работ.
6.1.2. Произвести приемку Работ в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором. 
6.1.3. После получения от Подрядчика письменного уведомления с отметкой организации, осуществляющей строительный контроль о полном окончании Работ и готовности их к сдаче, в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней назначить приказом рабочую комиссию по приёмке выполненных работ.
6.1.4. В установленном Договором порядке оплатить качественно выполненные Подрядчиком Работы.
6.2. Заказчик вправе выполнять надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также за правильностью использования Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. При этом Заказчик вправе привлечь третьих лиц для осуществления строительного контроля в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.3. Заказчик вправе привлечь третье лицо для проведения обследования Объекта с последующим составлением заключения                      о возможности производить Работы согласно установленной документации в случае, если Подрядчик отказывается в полном объеме выполнять Работы на Объекте по проектно-сметной документации.
6.4. Заказчик обязуется возвратить Подрядчику денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, в сумме пропорциональной выполнению Работ на каждом из Объектов согласно Приложению № 1 после подписания акта о приемке выполненных работ со стороны Заказчика и согласования его с организацией, осуществляющей строительный контроль на Объекте, с представителем органа местного самоуправления и представителем от собственников многоквартирного дома, уполномоченного участвовать в приемке выполненных работ в течение 30 календарных дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2,  на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 16 Договора.
6.5. При возникновении обстоятельств, указанных в пункте 4.9. настоящего Договора, Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, за вычетом суммы денежных средств, подлежащих удержанию по основаниям, указанным в пунктах 11.2., 11.3, 11.5., 11.7., 11.10., 11.11 настоящего Договора. 
6.6. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению Работ субподрядчиков Заказчик имеет право потребовать                               с Подрядчика направления реестра субподрядчиков с указанием планируемых видов, сроков и объемов Работ по каждому из них. При наличии сомнений в правильности организации Работ, заявленных сроках Работ, квалификации субподрядчиков, готовности субподрядчиков к исполнению Договора, Заказчик вправе запретить привлечение такого субподрядчика (допуск такого субподрядчика на Объект и выполнение им Работ).

7. Права и обязанности Подрядчика
7.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.
7.2. Подрядчик обязан обеспечить:
- производство Работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, предоставляемой Заказчиком, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами, а также другими действующими на территории РФ нормами и правилами;
- использование при производстве Работ только качественных материалов, соответствующих технической документации и действующим государственным стандартам (качество используемых материалов, конструкций и оборудования Подрядчик подтверждает документально сертификатами качества, паспортами); осуществить их доставку, приемку, разгрузку и складирование на строительной площадке;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;
-	предоставление гарантии на выполненные Работы на срок не менее 5 (пяти) лет.
7.3. Подрядчик обязан обеспечить в ходе производства Работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по пожарной безопасности, технике безопасности, охране труда, санитарных правил, культуре производства, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Подрядчик несет ответственность за несчастные случаи, связанные с выполнением работ, возникшие на строительной площадке, и их последствия.
7.4. Подрядчик обязан иметь лицензию в области пожарной безопасности на работы и услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту заполнения проемов в противопожарных преградах; по выполнению работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций, и представить копию такой лицензии в исполнительную документацию. В случае отсутствия лицензии на указанные работы и услуги, Подрядчик обязан заключить договор с организацией, имеющей такую лицензию для выполнения работ и услуг по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту заполнения проемов                                          в противопожарных преградах; по огнезащите материалов, изделий и конструкций, и представить документы (копия договора, акта выполненных работ, лицензии), подтверждающие выполнение таких работ и услуг в исполнительную документацию.
7.5. Подрядчик обязан при производстве Работ на многоквартирных домах, по которым проходят линии радиофикации, принимать меры, способствующие обеспечению сохранности этих линий, а также предварительно согласовывать все производимые строительные и ремонтные работы в районах прохождения линий радиофикации.
7.6. Подрядчик по согласованию с лицом, осуществляющим строительный контроль, извещает Заказчика не менее чем за                    24 часа до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком или привлеченным им лицом, осуществляющим строительный контроль скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
В случае неявки для проведения приемки представителя Заказчика в срок, указанный в извещении о приемке, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
7.7. При готовности Работ Подрядчик должен известить об этом Заказчика, предоставив заявку с отметкой организации, осуществляющей строительный контроль.
7.8. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
7.9. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик обязан вести на Объекте Общий журнал производства Работ по форме № КС-6, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а (далее - общий журнал производства работ).
7.9.1. До начала производства Работ на Объекте Подрядчик обязан представить Заказчику общий журнал производства работ в пронумерованном и прошнурованном виде для скрепления его печатью и подписью Заказчика.
7.9.2. Подрядчик обязан представить Заказчику общий журнал производства работ для контроля и проверки хода производства Работ на Объекте, по его первому требованию.
7.9.3. Требования Заказчика, касающиеся хода выполнения Работ и ведения общего журнала производства работ, исполняются Подрядчиком в обязательном порядке и отражаются в журнале в виде записи, подтверждающей выполнение этих требований.
7.10. Подрядчик обязан не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала производства Работ на Объекте уведомить                             в письменной форме Заказчика о начале производства Работ на Объекте.
7.11. Подрядчик несет риск случайной гибели, утраты, повреждения выполненных им работ, материалов, оборудования до момента окончательной сдачи всех работ по Договору Заказчику.
7.12. Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на строительной площадке квалифицированных инженерно-технических работников в достаточном количестве, а также требовать данного от субподрядчиков.
7.13. Подрядчик обязан допускать к работе людей только при наличии соответствующей квалификации и прошедших обучение и инструктажи с фиксацией в соответствующих журналах по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности.
7.14. Подрядчик обязан произвести полную уборку строительной площадки и вывезти до даты подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2, согласованного с лицом, осуществляющим строительный контроль, за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество.
7.15. Весь привлеченный Подрядчиком персонал должен иметь гражданство Российской Федерации или иметь необходимые разрешения на работу на территории Российской Федерации. Подрядчик несет ответственность за соблюдение привлеченным персоналом иных норм миграционного законодательства Российской Федерации.  
7.16. По окончании Работ одновременно с направлением акта по форме КС-2, согласованного с лицом, осуществляющим строительный контроль, передать их результат Заказчику, а также передать Заказчику всю информацию, необходимую для эксплуатации и иного использования результата Работ.
7.17. Подрядчик обязан в течение всего периода времени, установленного для выполнения Работ по настоящему Договору, обеспечить свободный доступ на строительную площадку представителям Заказчика.
7.18. Подрядчик обязан обеспечить отсутствие на строительной площадке посторонних лиц, не задействованных по предмету данного Договора.
7.19. Подрядчик подтверждает, что:
7.19.1. До подписания настоящего Договора тщательно изучил предмет Договора, может выполнять Работы по настоящему Договору на основании проектно-сметной документации и по согласованной цене, в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.
7.19.2. До подписания настоящего Договора произвел тщательный осмотр строительной площадки, состояние строительной площадки удовлетворяет его требованиям и условиям настоящего Договора.
7.19.3. На момент подписания настоящего Договора имеет полное представление об объемах, сроках, условиях выполнения Работ и готов приступить к выполнению всех обязательств по настоящему Договору по цене Договора. 
7.19.4. Обладает необходимыми и высокими специальными знаниями, мастерством, а также опытом капитального ремонта объектов, сходных по свойствам и качествам с объектом Заказчика, располагает высококвалифицированным персоналом, чтобы обеспечить производство работ в полном соответствии со всеми условиями настоящего Договора, нормами и правилами российского законодательства.
7.19.5. Имеются в наличии необходимые лицензии, аттестации, допуски, сертификаты и иные документы, необходимые                     в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для выполнения своих обязательств по Договору. Все перечисленные документы должны быть действительны в течение всего периода действия настоящего Договора.
7.20. Подрядчик обязан разместить на каждом Объекте информационную табличку (размер 700мм×450 мм) по образцу согласно Приложению № 3 к настоящему Договору в течение 7 календарных дней с даты подписания настоящего Договора.
7.21. Подрядчик проводит фотофиксацию состояния Объекта до начала производства Работ, во время производства Работ и после окончания производства Работ, предоставляет фотографии (по 4 штуки) в формате JPEG Заказчику до начала производства Работ, в ходе производства Работ и после окончания производства Работ.
На период выполнения Работ (в случае проведения работ по капитальному ремонту фасада, крыши) Подрядчик за свой счет устанавливает на Объекте видеокамеры с выведением видеопотока в режиме реального времени на сайт Заказчика http://fondkr33.ru посредством сети «Интернет» с целью круглосуточной видеотрансляции и записи процессов производства Работ. 
Требования к конструкции:
- возможность монтажа видеокамер неквалифицированным персоналом (по инструкции),
- наличие не менее 2-х видеокамер на один Объект, обеспечение максимального обзора при установке, согласование и исправление ракурсов камер по требованию Заказчика,  
- для обеспечения качественного изображения помещений с низкой освещенностью – использование камер цветного ночного зрения (технологии ColorVu, Full color, Night Vision и подобные),
Требования к видеотрансляциям:
-  разрешение видеотрансляции не менее 1080р (1920*1080), не менее 15к\с,
-  обеспечение круглосуточной видеотрансляции на сайте Заказчика (http://fondkr33.ru),
- обеспечение доступа к видеотрансляции и архивам с мобильного приложения для представителей Подрядчика и других заинтересованных лиц,
- все расходы по сотовой связи несет Подрядчик,
- наложение на трансляциях с камер (оверлей) даты, времени и адреса Объекта, 
- при прекращении трансляции более чем на одни сутки уведомить Заказчика по адресу электронной почты с указанием причины и даты восстановления трансляции,
Требования к таймлапсу:
- обеспечение вывода ролика таймлапс с камер на сайт Заказчика,
- разрешение формируемого ролика таймлапс не менее 1080р (1920*1080), частота съемки не менее 1 кадра раз в 20 минут,
- динамическое обновление ролика по предоставленной ссылке – не реже одного раза в сутки с момента начала проведения работ до приемки работ,
- предоставление активной ссылки Заказчику для скачивания и архивирования итогового ролика на срок не менее 60 дней с момента приемки работ,
Требование к архивам.
- глубина архива не менее 14 дней. Разрешение не менее 1080р с частотой кадров не менее 15к\с. 
- удаленный доступ Заказчику к архиву.  
Требования к техническому сопровождению:
- обеспечение Подрядчиком круглосуточного мониторинга работоспособности системы: отслеживание сигналов потерь 220 вольт, связи, отключения\закрытия видеокамер, несанкционированного вскрытия оборудования, уведомление                                         и предоставление отчетов Заказчику,
- техническая поддержка (по телефонному номеру),
- контроль правильности установки и ракурсов при монтаже видеокамер, удаленная настройка параметров изображения и оптимизация подключения к сетям сотовой связи.

7.22. Подрядчик обязан произвести оплату третьему лицу за произведенное обследование Объекта в случае, если по заключению, выданному третьим лицом, имеются отклонения от проектной-сметной документации.
7.23. Подрядчик вправе привлекать к выполнению Работ субподрядчиков после предварительного письменного согласования   с Заказчиком. При этом Подрядчик несет ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками Работ.
7.24. Подрядчик вправе уступить третьему лицу право требования к Заказчику об исполнении денежного обязательства по оплате выполненных (принятых) Работ по Договору. 
7.25. Выполнить Работы досрочно и получить за них оплату в соответствии с Договором.

8. Распределения рисков между Сторонами
8.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ, строительных и иных материалов, оборудования, инвентаря несет Подрядчик.
8.2. Риск случайной гибели результата Работ переходит на Заказчика после сдачи Заказчику выполненных в полном объеме работ по акту о приемке выполненных работ рабочей комиссией.

9. Сдача-приемка Работ
9.1. Приемка Работ осуществляется в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления от Подрядчика с отметкой организации, осуществляющей строительный контроль об окончании Работ.
9.2. На рабочую комиссию Подрядчик обязан предоставить исполнительную документацию в соответствии с перечнем, указанным в Приложении № 4.
9.3. После приемки Работ Подрядчик, не позднее 30 календарных дней с момента предъявления акта приемки (по форме Приложения № 5), предъявляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписанные представителем организации, осуществляющей строительный контроль на Объекте, представителем органа местного самоуправления и представителем от собственников многоквартирного дома, уполномоченного участвовать в приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3 в трех экземплярах; исполнительную документацию по выполненному капитальному ремонту, подписанную со своей стороны и согласованную с организацией, осуществляющей строительный контроль в прошитом и пронумерованном виде, в одном экземпляре; счета-фактуры. Также, вышеуказанные документы предоставляются в электронной форме.
Заказчик после получения акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и согласования его с организацией, осуществляющей строительный контроль на Объекте, с представителем органа местного самоуправления и представителем от собственников многоквартирного дома, уполномоченного участвовать в приемке выполненных работ, принимает объемы и качество выполненных работ на месте производства работ, соответствие исполнительной документации, проверяет правильность и соответствие примененных расценок договорной смете. 
Заказчик подписывает акт выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, либо отказывается от приемки Работ в течение                     30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Работ. В случае мотивированного отказа от приемки Работ Заказчик обязан предоставить Подрядчику акт произвольной формы с указанием недостатков выполненных Работ и сроков до истечения которых Подрядчик обязан их устранить.  
После подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 Подрядчик предъявляет Заказчику счет и (или) счет-фактуру на сумму выполненных Работ                       в соответствии с п.3.1 настоящего Договора. 
9.4. Заявка на приемку Работ должна содержать отметку организации, осуществляющей строительный контроль.
9.5. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества своими силами и без увеличения стоимости. 
9.6. Приемке результата Работ со стороны Заказчика (по его усмотрению) могут предшествовать предварительные испытания. В этих случаях приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний, а срок окончания Работ продлевается на срок периода испытаний.

10. Гарантия качества
10.1. Подрядчик гарантирует соответствие выполненных Работ требованиям действующего законодательства, государственных стандартов, строительным нормам и правилам, технической документации, сметам и иным условиям настоящего Договора, а также возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, установленного настоящим Договором и действующим законодательством РФ, и несет ответственность за отступления от них.
10.2. Гарантийный срок на результат Работ устанавливается продолжительностью 5 лет с момента подписания акта о приемке выполненных Работ рабочей комиссией.
10.3. В случае обнаружения дефектов или недостатков в выполненных Работах в течение гарантийного срока, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с приглашением к участию в составлении соответствующего акта (далее – уведомление), с указанием даты и времени. Такое уведомление будет считаться доставленным надлежащим образом, если оно направлено заказным письмом с уведомлением о вручении или направлено по электронной почте, указанной в разделе                        16 Договора в реквизитах Подрядчика. Подрядчик обязан обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя при составлении акта обнаружения недостатков (дефектов) для согласования порядка и сроков их устранения. Отсутствие представителей Подрядчика при составлении акта обнаружения недостатков (дефектов) расценивается как отказ Подрядчика от устранения недостатков (дефектов) при наличии доказательств уведомления Подрядчика о дате и времени составления акта. 
10.4. Подрядчик обязан за свой счет устранить обнаруженные дефекты и недостатки, являющиеся следствием ненадлежащего исполнения Подрядчиком либо привлеченными им субподрядчиками обязательств по настоящему Договору, в течение                         10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта обнаружения недостатков (дефектов) или в иные сроки, согласованные в акте обнаружения недостатков (дефектов). В этом случае гарантийный срок на некачественно выполненные Работы продлевается на период устранения дефектов этих Работ (с момента подачи Заказчиком уведомления о дефекте до момента приемки Заказчиком результата Работ по устранению недостатков (дефектов). 
10.5. Заказчик вправе устранить недостатки (дефекты) Работ своими силами, при этом Подрядчик обязан возместить Заказчику все связанные с этим расходы, в том числе возместить расходы по оплате соответствующих Работ, услуг третьим лицам, привлеченным для устранения недостатков (дефектов).
10.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта в целом или его частей  со стороны третьих лиц, а также в отношении дефектов, вызванных нарушением правил эксплуатации Объекта в целом или его инженерных систем, смонтированного в нем оборудования, или дефектов, возникших по независящим от Подрядчика причинам.
10.7. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или причины их появления и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, по требованию которой она была назначена, а в случае, если заключение экспертизы будет дано в ее пользу, другая Сторона обязана возместить ей расходы по экспертизе в течение                                              3 (трех) рабочих дней с даты получения заключения на основании соответствующего счета. В случае если экспертиза назначается по соглашению между Сторонами, то она оплачивается обеими Сторонами поровну.

11. Ответственность Сторон  
11.1. Сторона несет ответственность за убытки, причиненные другой Стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору. 
11.2. Подрядчик при выполнении обязательств по данному Договору несет материальную ответственность за повреждение (по вине Подрядчика) принятых Заказчиком Работ и причинение ущерба имуществу Заказчика, а также собственникам помещений в многоквартирном доме и обязан возмещать Заказчику и собственникам помещений стоимость причиненного ущерба, либо устранить ущерб собственными силами. Факт повреждений Работ, причинения ущерба и размер ущерба, подлежащего возмещению, устанавливаются соответствующим актом или, при наличии третьих лиц, соответствующим актом.
11.3. Подрядчик обязан возместить в полном объеме убытки, связанные с наложением на Заказчика экономических санкций за нарушение норм и правил ведения Работ, причиненные по вине Подрядчика.
11.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение Работ привлеченными им субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдением ими сроков производства Работ. 
11.5. Подрядчик обязан возместить все убытки в полном объеме, связанные с наложением на Заказчика экономических санкций, в связи с нарушением порядка привлечения иностранной рабочей силы, возникшие по вине Подрядчика.
11.6. Если Подрядчик не уведомил Заказчика под роспись в течение одного рабочего дня о наличии обстоятельств, вызванных действиями Заказчика и препятствующих завершению всех Работ в срок, предусмотренный Договором, то вина за нарушение сроков выполнения Работ ложится на Подрядчика и при возникновении спора он не вправе ссылаться на такие обстоятельства, как уважительные причины нарушения сроков выполнения Работ.
11.7. За нарушение Подрядчиком сроков начала выполнения Работ по Объекту, предусмотренных графиком производства работ, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости Работ по Объекту за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств по Договору.
За нарушение сроков выполнения Работ Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,3% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки.
За нарушение срока, предусмотренного абз. 1 п. 9.3. Договора Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки.
Если рабочая комиссия по приёмке выполненных Работ, не приняла Работы у Подрядчика и составила акт о выявленных недостатках в результате приемки результатов выполненных Работ (далее – акт), Подрядчик также обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,3% от стоимости Работ по Договору за каждый день устранения недостатков, указанных в акте.
Уплата неустойки может быть произведена посредством удержания Заказчиком из обеспечительного платежа, внесенного Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, денежных средств, в размере неустойки.
11.8. В случае нарушения срока оплаты выполненных Работ Заказчик обязан уплатить неустойку в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Заказчик считается просрочившим в случае нарушения им срока окончательного расчета, указанного в пункте 3.4. настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.12. Договора.
11.9. Пункты 11.7, 11.8 действуют при условии подачи соответствующей Стороной письменного требования об уплате данной неустойки. При этом неустойка начисляется с момента ненадлежащего исполнения обязательств по Договору. При отсутствии письменного требования размер неустойки составит 0%. 
11.10. Подрядчик обязуется оплатить Заказчику штраф в размере 10 000 рублей за каждый факт нарушения в случаях:
	необеспечения производства Работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами, а также другими действующими на территории РФ нормами и правилами;
	не размещения Подрядчиком на Объекте информационной таблички (размером 700мм x 450мм) согласно Приложению № 3     к Договору в течение 7 календарных дней с даты подписания Договора;
	нарушения Подрядчиком п.7.9., п.7.10 Договора.
	Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 50 000 рублей за каждое нарушение, выявленное в ходе выполнения Работ по Договору, а именно:
	нарушения требований п. 7.21 Договора.
	Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 50 000 рублей (за каждый Объект, в отношении которого договор страхования не заключен) в случае проведения Подрядчиком Работ на Объекте без заключения договора страхования согласно разделу 5 Договора.
	Взыскание Заказчиком штрафа за каждое нарушение не освобождает Подрядчика от дальнейшего исполнения своих обязательств по Договору.
11.11. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке полностью или в части, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов стоимости Договора в порядке, установленном Договором. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые Подрядчик обязан будет возместить Заказчику в качестве причиненных убытков (вреда).
12. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)
12.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или предотвратить разумными мерами, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, а также стихийные бедствия: землетрясения, наводнения, пожары и т.п.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить об этом другую Сторону. Сторона, ссылающаяся на какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия этого обстоятельства в письменной форме. Сторона, затронутая этим обстоятельством, если своевременно не объявит о его наступлении, не может ссылаться на него, разве что само это обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
12.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон путем направления уведомления о его расторжении другой Стороне. Обстоятельства непреодолимой силы продлевают срок исполнения тех пунктов данного Договора, выполнение которых явилось невозможным вследствие этих обстоятельств.
Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна самостоятельно предпринять все разумные и возможные меры с целью ограничить неблагоприятные последствия, вызванные указанными обстоятельствами.

13. Разрешение споров
13.1. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Договора, прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Владимирской области либо в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Указанные споры, разногласия, претензии и требования рассматриваются третейским судом, сформированным из числа лиц (арбитров), входящих в состав Коллегии Арбитражного центра при РСПП по спорам в сфере строительства. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию. 
         Документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по адресам электронной почты Сторон, указанным в разделе 16 настоящего Договора. Стороны признают и соглашаются, что получение ими писем по адресам электронной почты является надлежащим уведомлением Стороны и порождает для нее соответствующие правовые последствия, вызванные таким сообщением. Стороны договорились о рассмотрении споров третейским судом в составе единоличного арбитра. 
13.2. До передачи спора на разрешение арбитража (третейского разбирательства) суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения. 
         При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков (дефектов) выполненных строительно-монтажных работ, или их причин, а также по поводу качества используемых материалов, может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на такую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений им условий настоящего Договора, требований технической документации и строительных норм и правил, или отсутствие причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами).

14. Срок действия Договора. Изменение и прекращение Договора.
14.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 
14.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время по взаимному соглашению, оформленному в письменном виде, предварительно проведя все взаиморасчеты.
14.3. Настоящий Договор подразумевает полное взаимопонимание между Сторонами в отношении их прав и обязанностей,                в результате чего все предыдущие переговоры и переписка по его предмету теряют силу. 
14.4. Дополнения и изменения настоящего Договора должны согласовываться между Сторонами и оформляться в виде дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными представителями Сторон и вступают в силу с момента их подписания. 
14.5. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части исключения любого из Объектов, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору с взысканием причиненных убытков в следующих случаях: 
а) систематическое (2 раза и более) нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ;
б) задержка Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме;
в) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных Договором, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) Подрядчиком требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ;
г) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Заказчиком в соответствии с условиями Договора;
д) прекращение членства Подрядчика в саморегулируемой организации, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права подрядной организации на производство работ;
е) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью более 30 календарных дней по любому из Объектов;
ж) нарушение срока замены независимой гарантии, установленного Договором, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации гаранта более чем на 2 рабочих дня;
з) выявление Заказчиком после заключения Договора факта недействительности представленной Подрядчиком независимой гарантии (представление поддельных документов, получение от гаранта опровержения выдачи независимой гарантии подрядной организации в письменной форме);
и) неисполнение обязательства о продлении срока независимой гарантии при изменении сроков выполнения работ в связи с изменением по соглашению сторон сроков выполнения работ либо при нарушении Подрядчиком предусмотренных Договором о проведении капитального ремонта сроков оказания услуг и (или) выполнения работ.
       Заказчик принимает решение об одностороннем расторжении Договора полностью или в части и в письменной форме уведомляет об этом Подрядчика. Заказчик обязан направить уведомление о расторжении Договора не позднее чем за                                   15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора с Подрядчиком. Уведомление должно содержать наименование сторон, реквизиты Договора, причины, послужившие основанием для расторжения Договора о проведении капитального ремонта, и документы, их подтверждающие.
14.6. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных Подрядчиком Работ по Договору с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
14.7. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон в судебном порядке в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса РФ. 
14.8. Не допускается расторжение Договора по соглашению Сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и Подрядчиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.
14.9. При расторжении Договора, в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора, Подрядчик вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора, Подрядчик обязан в течение 10 календарных дней, с момента получения уведомления о расторжении Договора, вернуть на счет Заказчика денежные средства, оплаченные Заказчиком в счет аванса в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

15. Особые условия
15.1.  За ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения работ по Договору, отвечает виновная Сторона.
15.2. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы или уступлены каким-либо образом третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.
15.3. Все уведомления и сообщения, касающиеся исполнения обязательств по настоящему Договору, а также в случае изменения любого из указанных в Договоре адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, электронной почты Подрядчика должны направляться в письменной форме и быть подписаны уполномоченными представителями Сторон не позднее 3 рабочих дней со дня таких изменений. Сообщения будут считаться доставленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по электронной почте, указанной в реквизитах Сторон по Договору или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. На сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у другой стороны актуальной информации об адресе для направления соответствующей корреспонденции. 
15.3.1. Любая информация (памятки, уведомления, письма, предписания и иная информация), носящая информационный или уведомительный характер, размещаются Заказчиком на официальном сайте: fondkr33.ru в разделе «Важная информация для подрядчиков» и направляется Подрядчику по электронной почте. 
15.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
15.5. Стороны гарантируют и подтверждают свои полномочия на подписание настоящего договора.
15.6.В случае выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов                                                            на территории ЗАТО г. Радужный, Подрядчику необходимо соблюдать особые условия:  ЗАТО г. Радужный является закрытым административно-территориальным образованием, на территории которого действует особый режим въезда и ведения производственно-хозяйственной деятельности, установленные Законом Российской Федерации от 14.07.1992 г.                   № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Положением об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2017 г. № 735, Инструкцией о пропускном режиме в контролируемой зоне ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Исполнитель несет ответственность за соблюдение особого режима на территории закрытого административно - территориального образования (ЗАТО) г. Радужный Владимирской области, в том числе:
o	соблюдение пропускного режима в установленном порядке на основании письменных заявок на имя главы города, поданных не позднее 10 (десяти) рабочих дней до дня въезда на территорию ЗАТО г. Радужный;
o	ограничение на владение, пользование и распоряжение недвижимым имуществом,
o	особенности трудоустройства граждан, вытекающие из ограничения на въезд иностранных граждан.
o	порядок въезда (выезда) транспортных средств на территорию ЗАТО,
o	порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) rpузов, документов и материальных ценностей.

ЗАТО г. Радужный является территорией, для въезда на которую иностранным гражданам требуется специальное разрешение. Порядок въезда граждан, в том числе и иностранных, утвержден решением Совета народных депутатов ЗАТО                                  г. Радужный от 04.06.2018 года № 10/41 «О порядке въезда физических лиц для постоянного проживания (временного пребывания) на территорию контролируемой зоны закрытого административно - территориального образования город Радужный Владимирской области». В соответствии с вышеуказанным решением, для иностранного гражданина может быть оформлен разовый пропуск на территорию ЗАТО г. Радужный сроком до 3 (трех) дней по заявлению граждан РФ, зарегистрированных по месту жительства на территории ЗАТО г. Радужный, или организаций, расположенных и зарегистрированных на территории ЗАТО г. Радужный, при наличии согласования с представителем УФСБ РФ по Владимирской области.

Приложения к Договору:
1.	Приложение № 1 - Ведомость договорной цены.
2.	Приложение № 2 - График производства работ.
3.	Приложение № 3 - Образец информационной таблички.
4.	Приложение № 4 - Состав исполнительной документации.
5.	Приложение № 5 – АКТ приемки результатов выполненных работ (форма)
6.	Приложение № 6 – Техническое задание.

16. Реквизиты Сторон:

	          Заказчик:  
                                    Подрядчик:

	
Некоммерческая организация «Фонд
капитального ремонта многоквартирных
домов Владимирской области»
Место нахождения: 
600017, г. Владимир, ул. Батурина, д. 30
(1 подъезд, 6 этаж)
Почтовый адрес: 
600017, г. Владимир, ул. Батурина, д. 30
ИНН: 3329999430
КПП: 332801001
ОГРН: 1133300001163
E-mail: info@fondkr33.ru
Контактный телефон: +7 (4922) 77-82-85
Банковские реквизиты:
Банк: Банк ГПБ (АО) в г. Москва
Расчетный счет: 40603810900000000048
Корреспондентский счет:
30101810200000000823
БИК: 044525823.

Заместитель 
генерального директора                     А.В. Семин

Приложение № 1 

Ведомость договорной цены

адрес объекта и наименование работ	Начальная (максимальная) цена договора, руб., с НДС	Цена договора по результатам электронного аукциона, 
руб., с НДС	
1.	Капитальный ремонт _____ многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
__________________.			
Итого:			

Приложение № 2 

СОГЛАСОВАНО

 

___________________	
УТВЕРЖДЕНО

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области»

Заместитель
генерального директора                                 А.В. Семин

График производства работ

Наименование работ	Сроки выполнения работ	

Приложение № 3

ОБРАЗЕЦ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТАБЛИЧКИ
(выпускается размером 700 мм×450 мм)

Приложение № 4 

Состав исполнительной документации,
предоставляемой подрядчиком в Фонд капитального ремонта для проверки и оплаты выполненных работ по капитальному ремонту.
1. Система Водоотведения
1. Титульный лист с реестром передаваемой Исполнительной документации, заверенный подписью руководителя и печатью организации подрядной организации.
2. Приказ о назначении ответственного со стороны подрядной организации за проведение ремонтных работ на объекте.
3. Исполнительные схемы и чертежи, с указанием линейных размеров, высотных отметок и других обозначений для проверки объемов выполненных работ, заверенные печатью организации и подписью ответственного за проведение ремонтных работ на объекте либо руководителя организации, печатью и подписью организации, осуществляющей строительный контроль.
4. Журнал производства работ (по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12 января 2007г. №7, в ручном исполнении (записи)), выданный Фондом.
5. Журнал входного учета и контроля качества материалов, конструкций, оборудования, поставляемых на объект капитального ремонта. 
6. Копии сертификатов соответствия, паспортов качества и иные документы, подтверждающие качество применяемых материалов, их соответствие проектно-сметной документации, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации.
7. Акты освидетельствования скрытых работ (по форме Приложения №3 к Требованиям к составу и порядку ведению исполнительной документации при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства РД-11-02-2006 от 26.12.2006), с прикрепленными распечатанными фотографиями актируемых работ.  Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.
8. Акты формы КС-2(3экз), согласованные с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), заверенные подписью и печатью организации осуществляющей строительный контроль,                   КС-3 (3 экз).
9. Копия договора подряда с приложениями (графика производства работ, локального сметного расчета, утвержденного Фондом и т.д.), заверенная печатью организации и подписью руководителя организации.
10. Фотофиксация состояния объекта до начала проведения работ, во время их производства и после окончания на электронном носителе (диск, флеш-карта).
11. Копии писем о согласовании Фондом изменений, вносимых в выданную ПСД, замены материалов, исключения отдельных видов работ, если данные изменения производились в процессе капитального ремонта. 
12.Копии документов, подтверждающие затраты на утилизацию строительного мусора (договор со специализированной организацией, талоны на утилизацию, акты выполнения работ или оказания услуг), заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации.
13. Копии документов, подтверждающие возвратную стоимость металлолома (чек, приемо-сдаточный акт), заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации, в случае если в локальном сметном расчете справочно указана стоимость возврата металлолома.
14. Сметная документация (4 экз.) (локальная смета на работы, выявленные в результате уточнения проектных решений, локальная смета на непредвиденные работы и затраты, локальная смета на дополнительные работы), в случае выполнения данных работ подрядной организацией. 
Порядок оформления сметной документации размещен на сайте Фонда в разделе «Важная информация для подрядчиков».
15. Копии расписок от собственников помещений в МКД, управляющей компании о возмещении материального ущерба, если такой ущерб был причинен подрядной организацией в процессе проведения капитального ремонта.
16. Копии Актов о недопуске собственниками в жилые помещения МКД подрядной организации для проведения работ, если данные случаи возникали в процессе проведения капитального ремонта.
17. Акт испытания систем внутренней канализации (по форме согласно СП 73.13330.2012)
2. Система ГВС, ХВС
1. Титульный лист с реестром передаваемой Исполнительной документации, заверенный подписью руководителя и печатью организации подрядной организации.
2. Приказ о назначении ответственного со стороны подрядной организации за проведение ремонтных работ на объекте.
3. Исполнительные схемы и чертежи, с указанием линейных размеров, высотных отметок и других обозначений для проверки объемов выполненных работ, заверенные печатью организации и подписью ответственного за проведение ремонтных работ на объекте либо руководителя организации, печатью и подписью организации, осуществляющей строительный контроль.
4. Журнал производства работ (по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12 января 2007г. №7, в ручном исполнении (записи)), выданный Фондом.
5. Журнал входного учета и контроля качества материалов, конструкций, оборудования, поставляемых на объект капитального ремонта. 
6. Копии сертификатов соответствия, паспортов качества и иные документы, подтверждающие качество применяемых материалов, их соответствие проектно-сметной документации, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации.
7. Акты освидетельствования скрытых работ (по форме Приложения №3 к Требованиям к составу и порядку ведению исполнительной документации при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства РД-11-02-2006 от 26.12.2006), с прикрепленными распечатанными фотографиями актируемых работ.  Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.
8. Акты формы КС-2(3экз), согласованные с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), заверенные подписью и печатью организации осуществляющей строительный контроль,                  КС-3 (3 экз).
9. Копия договора подряда с приложениями (графика производства работ, локального сметного расчета, утвержденного Фондом и т.д.), заверенная печатью организации и подписью руководителя организации.
10. Фотофиксация состояния объекта до начала проведения работ, во время их производства и после окончания на электронном носителе (диск, флеш-карта).
11. Копии писем о согласовании Фондом изменений, вносимых в выданную ПСД, замены материалов, исключения отдельных видов работ, если данные изменения производились в процессе капитального ремонта. 
12.Копии документов, подтверждающие затраты на утилизацию строительного мусора (договор со специализированной организацией, талоны на утилизацию, акты выполнения работ или оказания услуг), заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации.
13. Копии документов, подтверждающие возвратную стоимость металлолома (чек, приемо-сдаточный акт), заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации, в случае если в локальном сметном расчете справочно указана стоимость возврата металлолома.
14. Сметная документация (4 экз.) (локальная смета на работы, выявленные в результате уточнения проектных решений, локальная смета на непредвиденные работы и затраты, локальная смета на дополнительные работы), в случае выполнения данных работ подрядной организацией. 
Порядок оформления сметной документации размещен на сайте Фонда в разделе «Важная информация для подрядчиков».
15. Копии расписок от собственников помещений в МКД, управляющей компании о возмещении материального ущерба, если такой ущерб был причинен подрядной организацией в процессе проведения капитального ремонта.
16. Копии Актов о недопуске собственниками в жилые помещения МКД подрядной организации для проведения работ, если данные случаи возникали в процессе проведения капитального ремонта.
17. Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность (по форме согласно СП 73.13330.2012)
3. Крыши
Скатные крыши
1. Титульный лист с реестром передаваемой Исполнительной документации, заверенный подписью и печатью организации.
2. Приказ о назначении ответственного со стороны подрядной организации за проведение ремонтных работ на объекте.
3. Исполнительные схемы и чертежи, с указанием линейных размеров, высотных отметок и других обозначений для проверки объемов выполненных работ, заверенные печатью организации и подписью ответственного за проведение ремонтных работ на объекте либо руководителя организации, печатью и подписью организации, осуществляющей строительный контроль.
4. Журнал производства работ (по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12 января 2007г. №7, в ручном исполнении (записи)), выданный Фондом.
5. Журнал входного учета и контроля качества материалов, конструкций, оборудования, поставляемых на объект капитального ремонта. 
6. Копии сертификатов соответствия, паспортов качества и иные документы, подтверждающие качество применяемых материалов, их соответствие проектно-сметной документации, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации.
7. Акты освидетельствования скрытых работ (по форме Приложения №3 к Требованиям к составу и порядку ведению исполнительной документации при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства РД-11-02-2006 от 26.12.2006), с прикрепленными распечатанными фотографиями актируемых работ. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.
8. Акты формы КС-2(3экз), согласованные с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), заверенные подписью и печатью организации осуществляющей строительный контроль,                 КС-3 (3 экз).
9. Копия договора подряда с приложениями (графика производства работ, локального сметного расчета, утвержденного Фондом и т.д.), заверенная печатью организации и подписью руководителя организации.
10. Копии писем о согласовании Фондом изменений, вносимых в выданную ПСД, замены материалов, исключения отдельных видов работ, если данные изменения производились в процессе капитального ремонта. 
11. Копии документов, подтверждающие затраты на утилизацию строительного мусора (договор со специализированной организацией, талоны на утилизацию, акты выполнения работ или оказания услуг), заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации.
12. Копии документов, подтверждающие возвратную стоимость металлолома (чек, приемо-сдаточный акт), заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации, в случае если в локальном сметном расчете справочно указана стоимость возврата металлолома.
13. Сметная документация (4 экз.) (локальная смета на работы, выявленные в результате уточнения проектных решений, локальная смета на непредвиденные работы и затраты, локальная смета на дополнительные работы), в случае выполнения данных работ подрядной организацией. 
Порядок оформления сметной документации размещен на сайте Фонда в разделе «Важная информация для подрядчиков».
14. Копии расписок от собственников помещений в МКД, управляющей компании о возмещении материального ущерба, если такой ущерб был причинен подрядной организацией в процессе проведения капитального ремонта.
15. Копия лицензии на монтаж и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах; на устройство(кладка, монтаж) и ремонт дымоходов; на выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций  (заверенной печатью и подписью руководителя подрядной организации), выданной  соответствующим органом, , если данные работы выполнялись в процессе капитального ремонта в соответствии с выданной ПСД. 
 В случае отсутствия данной лицензии у подрядной организации – копия договора на субподряд с организацией, имеющей лицензию на проведение данных работ, с приложением копии лицензии и Акта выполненных работ, заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации.
16. Акт испытания ограждения крыши
17. Фотофиксация состояния объекта до начала проведения работ, во время их производства и после окончания на электронном носителе (диск, флеш-карта).
Кровли из рулонных материалов.
1. Титульный лист с реестром передаваемой Исполнительной документации, заверенный подписью и печатью организации.
2. Приказ о назначении ответственного со стороны подрядной организации за проведение ремонтных работ на объекте.
3. Исполнительные схемы и чертежи, с указанием линейных размеров, высотных отметок и других обозначений для проверки объемов выполненных работ, заверенные печатью организации и подписью ответственного за проведение ремонтных работ на объекте либо руководителя организации, печатью и подписью организации, осуществляющей строительный контроль.
4. Журнал производства работ (по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12 января 2007г. №7, в ручном исполнении (записи)), выданный Фондом.
5. Журнал входного учета и контроля качества материалов, конструкций, оборудования, поставляемых на объект капитального ремонта. 
6. Копии сертификатов соответствия, паспортов качества и иные документы, подтверждающие качество применяемых материалов, их соответствие проектно-сметной документации, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации.
7. Акты освидетельствования скрытых работ (по форме Приложения №3 к Требованиям к составу и порядку ведению исполнительной документации при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства РД-11-02-2006 от 26.12.2006). Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией), с прикрепленными распечатанными фотографиями актируемых работ.
8. Акты формы КС-2(4экз), согласованные с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), заверенные подписью и печатью организации осуществляющей строительный контроль,                  КС-3(4 экз).
9. Копия договора подряда с приложениями (графика производства работ, локального сметного расчета, утвержденного Фондом и т.д.), заверенная печатью организации и подписью руководителя организации. 
10. Копии писем о согласовании Фондом изменений, вносимых в выданную ПСД, замены материалов, исключения отдельных видов работ, если данные изменения производились в процессе капитального ремонта. 
11.Копии документов, подтверждающие затраты на утилизацию строительного мусора (договор со специализированной организацией, талоны на утилизацию, акты выполнения работ или оказания услуг), заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации.
12. Копии документов, подтверждающие возвратную стоимость металлолома (чек, приемо-сдаточный акт), заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации, в случае если в локальном сметном расчете справочно указана стоимость возврата металлолома.
13. Сметная документация (4 экз.) (локальная смета на работы, выявленные в результате уточнения проектных решений, локальная смета на непредвиденные работы и затраты, локальная смета на дополнительные работы), в случае выполнения данных работ подрядной организацией. 
Порядок оформления сметной документации размещен на сайте Фонда в разделе «Важная информация для подрядчиков».
14. Копии расписок от собственников помещений в МКД, управляющей компании о возмещении материального ущерба, если такой ущерб был причинен подрядной организацией в процессе проведения капитального ремонта.
15. Копия лицензии на монтаж и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах; на устройство(кладка, монтаж) и ремонт дымоходов; на выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций  (заверенной печатью и подписью руководителя подрядной организации), выданной  соответствующим органом, , если данные работы выполнялись в процессе капитального ремонта в соответствии с выданной ПСД. 
 В случае отсутствия данной лицензии у подрядной организации – копия договора на субподряд с организацией, имеющей лицензию на проведение данных работ, с приложением копии лицензии и Акта выполненных работ, заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации.
16. Акт испытаний адгезии рулонного ковра к основанию и слоев кровли между собой (при применении наплавляемых материалов).
17. Акт испытания ограждения крыши.
18. Фотофиксация состояния объекта до начала проведения работ, во время их производства и после окончания на электронном носителе (диск, флеш-карта).
4. Система отопления
1. Титульный лист с реестром передаваемой Исполнительной документации, заверенный подписью и печатью организации.
2. Приказ о назначении ответственного со стороны подрядной организации за проведение ремонтных работ на объекте.
3. Исполнительные схемы и чертежи, с указанием линейных размеров, высотных отметок и других обозначений для проверки объемов выполненных работ, заверенные печатью организации и подписью ответственного за проведение ремонтных работ на объекте либо руководителя организации, печатью и подписью организации, осуществляющей строительный контроль
4. Журнал производства работ (по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12 января 2007г. №7, в ручном исполнении (записи)), выданный Фондом. 
5. Журнал входного учета и контроля качества материалов, конструкций, оборудования, поставляемых на объект капитального ремонта. 
6. Копии сертификатов соответствия, паспортов качества и иные документы, подтверждающие качество применяемых материалов, их соответствие проектно-сметной документации, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации.
7. Акты освидетельствования скрытых работ (по форме Приложения №3 к Требованиям к составу и порядку ведению исполнительной документации при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства РД-11-02-2006 от 26.12.2006), с прикрепленными распечатанными фотографиями актируемых работ. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.
8. Акты формы КС-2(3экз), согласованные с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), заверенные подписью и печатью организации осуществляющей строительный контроль,                КС-3 (3 экз).
9. Копия договора подряда с приложениями (графика производства работ, локального сметного расчета, утвержденного Фондом и т.д.), заверенная печатью организации и подписью руководителя организации.
10. Фотофиксация состояния объекта до начала проведения работ, во время их производства и после окончания на электронном носителе (диск, флеш-карта). 
11. Копии писем о согласовании Фондом изменений, вносимых в выданную ПСД, замены материалов, исключения отдельных видов работ, если данные изменения производились в процессе капитального ремонта. 
12.Копии документов, подтверждающие затраты на утилизацию строительного мусора (договор со специализированной организацией, талоны на утилизацию, акты выполнения работ или оказания услуг), заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации.
13. Копии документов, подтверждающие возвратную стоимость металлолома (чек, приемо-сдаточный акт), заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации, в случае если в локальном сметном расчете справочно указана стоимость возврата металлолома.
14. Сметная документация (4 экз.) (локальная смета на работы, выявленные в результате уточнения проектных решений, локальная смета на непредвиденные работы и затраты, локальная смета на дополнительные работы), в случае выполнения данных работ подрядной организацией. 
Порядок оформления сметной документации размещен на сайте Фонда в разделе «Важная информация для подрядчиков».
15. Копии расписок от собственников помещений в МКД, управляющих компаний о возмещении материального ущерба, если такой ущерб был причинен подрядной организацией в процессе проведения капитального ремонта. 
16. Копии Актов о недопуске собственниками в жилые помещения МКД подрядной организации для проведения работ, если данные случаи возникали в процессе проведения капитального ремонта
17. Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность (по форме согласно СП 73.13330.2012)
18. Акт на промывку тепловой сети
5. Подвал
1. Титульный лист с реестром передаваемой Исполнительной документации, заверенный подписью и печатью организации.
2. Приказ о назначении ответственного со стороны подрядной организации за проведение ремонтных работ на объекте.
3. Исполнительные схемы и чертежи, с указанием линейных размеров, высотных отметок и других обозначений для проверки объемов выполненных работ, заверенные печатью организации и подписью ответственного за проведение ремонтных работ на объекте либо руководителя организации, печатью и подписью организации, осуществляющей строительный контроль.
4. Журнал производства работ (по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12 января 2007г. №7, в ручном исполнении (записи)), выданный Фондом. 
5. Журнал входного учета и контроля качества материалов, конструкций, оборудования, поставляемых на объект капитального ремонта. 
6. Копии сертификатов соответствия, паспортов качества и иные документы, подтверждающие качество применяемых материалов, их соответствие проектно-сметной документации, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации.
7. Акты освидетельствования скрытых работ (по форме Приложения №3 к Требованиям к составу и порядку ведению исполнительной документации при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства РД-11-02-2006 от 26.12.2006), с прикрепленными распечатанными фотографиями актируемых работ. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.
8. Акты формы КС-2(3экз), согласованные с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), заверенные подписью и печатью организации осуществляющей строительный контроль,                 КС-3 (3 экз).
9. Копия договора подряда с приложениями (графика производства работ, локального сметного расчета, утвержденного Фондом и т.д.), заверенная печатью организации и подписью руководителя организации.
10. Фотофиксация состояния объекта до начала проведения работ, во время их производства и после окончания на электронном носителе (диск, флеш-карта). 
11. Копии писем о согласовании Фондом изменений, вносимых в выданную ПСД, замены материалов, исключения отдельных видов работ, если данные изменения производились в процессе капитального ремонта. 
12.Копии документов, подтверждающие затраты на утилизацию строительного мусора (договор со специализированной организацией, талоны на утилизацию, акты выполнения работ или оказания услуг), заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации.
13. Копии документов, подтверждающие возвратную стоимость металлолома (чек, приемо-сдаточный акт), заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации, в случае если в локальном сметном расчете справочно указана стоимость возврата металлолома.
14. Сметная документация (4 экз.) (локальная смета на работы, выявленные в результате уточнения проектных решений, локальная смета на непредвиденные работы и затраты, локальная смета на дополнительные работы), в случае выполнения данных работ подрядной организацией. 
Порядок оформления сметной документации размещен на сайте Фонда в разделе «Важная информация для подрядчиков».
15. Копии расписок от собственников помещений в МКД, управляющей компании о возмещении материального ущерба, если такой ущерб был причинен подрядной организацией в процессе проведения капитального ремонта.
16. Копии Актов о недопуске собственниками в помещения МКД подрядной организации для проведения работ, если данные случаи возникали в процессе проведения капитального ремонта

6. Фасад
1. Титульный лист с реестром передаваемой Исполнительной документации, заверенный подписью и печатью организации.
2. Приказ о назначении ответственного со стороны подрядной организации за проведение ремонтных работ на объекте.
3. Исполнительные схемы и чертежи, с указанием линейных размеров, высотных отметок и других обозначений для проверки объемов выполненных работ, заверенные печатью организации и подписью ответственного за проведение ремонтных работ на объекте либо руководителя организации, печатью и подписью организации, осуществляющей строительный контроль.
4. Журнал производства работ (по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12 января 2007г. №7, в ручном исполнении (записи)), выданный Фондом. 
5. Журнал входного учета и контроля качества материалов, конструкций, оборудования, поставляемых на объект капитального ремонта. 
6. Копии сертификатов соответствия, паспортов качества и иные документы, подтверждающие качество применяемых материалов, их соответствие проектно-сметной документации, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации.
7. Акты освидетельствования скрытых работ (по форме Приложения №3 к Требованиям к составу и порядку ведению исполнительной документации при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства РД-11-02-2006 от 26.12.2006), с прикрепленными распечатанными фотографиями актируемых работ. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.
8. Акты формы КС-2(3экз), согласованные с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), заверенные подписью и печатью организации осуществляющей строительный контроль,                  КС-3 (3 экз).
9. Копия договора подряда с приложениями (графика производства работ, локального сметного расчета, утвержденного Фондом и т.д.), заверенная печатью организации и подписью руководителя организации.
10. Фотофиксация состояния объекта до начала проведения работ, во время их производства и после окончания на электронном носителе (диск, флеш-карта).
11. Копии писем о согласовании Фондом изменений, вносимых в выданную ПСД, замены материалов, исключения отдельных видов работ, если данные изменения производились в процессе капитального ремонта. 
12.Копии документов, подтверждающие затраты на утилизацию строительного мусора (договор со специализированной организацией, талоны на утилизацию, акты выполнения работ или оказания услуг), заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации.
13. Копии документов, подтверждающие возвратную стоимость металлолома (чек, приемо-сдаточный акт), заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации, в случае если в локальном сметном расчете справочно указана стоимость возврата металлолома.
14. Сметная документация (4 экз.) (локальная смета на работы, выявленные в результате уточнения проектных решений, локальная смета на непредвиденные работы и затраты, локальная смета на дополнительные работы), в случае выполнения данных работ подрядной организацией. 
Порядок оформления сметной документации размещен на сайте Фонда в разделе «Важная информация для подрядчиков».
15. Копии расписок от собственников помещений в МКД, управляющей компании о возмещении материального ущерба, если такой ущерб был причинен подрядной организацией в процессе проведения капитального ремонта.
16. Копии Актов о недопуске собственниками к замене балконов МКД подрядной организации для проведения работ, если данные случаи возникали в процессе проведения капитального ремонта
7. Фундамент
1. Титульный лист с реестром передаваемой Исполнительной документации, заверенный подписью и печатью организации.
2. Приказ о назначении ответственного со стороны подрядной организации за проведение ремонтных работ на объекте.
3. Исполнительные схемы и чертежи, с указанием линейных размеров, высотных отметок и других обозначений для проверки объемов выполненных работ, заверенные печатью организации и подписью ответственного за проведение ремонтных работ на объекте либо руководителя организации, печатью и подписью организации, осуществляющей строительный контроль.
4. Журнал производства работ (по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12 января 2007г. №7, в ручном исполнении (записи)), выданный Фондом. 
5. Журнал входного учета и контроля качества материалов, конструкций, оборудования, поставляемых на объект капитального ремонта. 
6. Копии сертификатов соответствия, паспортов качества и иные документы, подтверждающие качество применяемых материалов, их соответствие проектно-сметной документации, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации.
7. Акты освидетельствования скрытых работ (по форме Приложения №3 к Требованиям к составу и порядку ведению исполнительной документации при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства РД-11-02-2006 от 26.12.2006), с прикрепленными распечатанными фотографиями актируемых работ. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.
8. Акты формы КС-2(3экз), согласованные с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), заверенные подписью и печатью организации осуществляющей строительный контроль, КС-3(3 экз)
9. Копия договора подряда с приложениями (графика производства работ, локального сметного расчета, утвержденного Фондом и т.д.), заверенная печатью организации и подписью руководителя организации.
10. Фотофиксация состояния объекта до начала проведения работ, во время их производства и после окончания на электронном носителе (диск, флеш-карта). 
11.Копии писем о согласовании Фондом изменений, вносимых в выданную ПСД, замены материалов, исключения отдельных видов работ, если данные изменения производились в процессе капитального ремонта. 
12.Копии документов, подтверждающие затраты на утилизацию строительного мусора (договор со специализированной организацией, талоны на утилизацию, акты выполнения работ или оказания услуг), заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации.
13. Копии документов, подтверждающие возвратную стоимость металлолома (чек, приемо-сдаточный акт), заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации, в случае если в локальном сметном расчете справочно указана стоимость возврата металлолома.
14. Сметная документация (4 экз.) (локальная смета на работы, выявленные в результате уточнения проектных решений, локальная смета на непредвиденные работы и затраты, локальная смета на дополнительные работы), в случае выполнения данных работ подрядной организацией. 
Порядок оформления сметной документации размещен на сайте Фонда в разделе «Важная информация для подрядчиков».
15. Копии расписок от собственников помещений в МКД, управляющей компании о возмещении материального ущерба, если такой ущерб был причинен подрядной организацией в процессе проведения капитального ремонта
8. Система электроснабжения
1. Титульный лист с реестром передаваемой Исполнительной документации, заверенный подписью и печатью организации.
2. Приказ о назначении ответственного со стороны подрядной организации за проведение ремонтных работ на объекте.
3. Исполнительные схемы и чертежи, с указанием линейных размеров, высотных отметок и других обозначений для проверки объемов выполненных работ, заверенные печатью организации и подписью ответственного за проведение ремонтных работ на объекте либо руководителя организации, печатью и подписью организации, осуществляющей строительный контроль.
4. Журнал производства работ (по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12 января 2007г. №7, в ручном исполнении (записи)), выданный Фондом.
5. Журнал входного учета и контроля качества материалов, конструкций, оборудования, поставляемых на объект капитального ремонта. 
6. Копии сертификатов соответствия, паспортов качества и иные документы, подтверждающие качество применяемых материалов, их соответствие проектно-сметной документации, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации.
7. Акты освидетельствования скрытых работ (по форме Приложения №3 к Требованиям к составу и порядку ведению исполнительной документации при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства РД-11-02-2006 от 26.12.2006), с прикрепленными распечатанными фотографиями актируемых работ. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.
8. Акты формы КС-2(3экз), согласованные с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), заверенные подписью и печатью организации осуществляющей строительный контроль,                 КС-3 (3 экз).
9. Копия договора подряда с приложениями (графика производства работ, локального сметного расчета, утвержденного Фондом и т.д.), заверенная печатью организации и подписью руководителя организации.
10. Фотофиксация состояния объекта до начала проведения работ и после их окончания на электронном носителе (диск, флеш-карта) согласно п. 6.19 Договора подряда 
11.Копии писем о согласовании Фондом изменений, вносимых в выданную ПСД, замены материалов, исключения отдельных видов работ, если данные изменения производились в процессе капитального ремонта. 
12.Копии документов, подтверждающие затраты на утилизацию строительного мусора (договор со специализированной организацией, талоны на утилизацию, акты выполнения работ или оказания услуг), заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации.
13. Копии документов, подтверждающие возвратную стоимость металлолома (чек, приемо-сдаточный акт), заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации, в случае если в локальном сметном расчете справочно указана стоимость возврата металлолома.
14. Сметная документация (4 экз.) (локальная смета на работы, выявленные в результате уточнения проектных решений, локальная смета на непредвиденные работы и затраты, локальная смета на дополнительные работы), в случае выполнения данных работ подрядной организацией. 
Порядок оформления сметной документации размещен на сайте Фонда в разделе «Важная информация для подрядчиков».
15. Копии расписок от собственников помещений в МКД, управляющих компаний о возмещении материального ущерба, если такой ущерб был причинен подрядной организацией в процессе проведения капитального ремонта 
16. Копии Актов о недопуске собственниками в жилые помещения МКД подрядной организации для проведения работ, если данные случаи возникали в процессе проведения капитального ремонта.
17. Акты приемо-сдаточных испытаний согласно ПУЭ (перечень актируемых испытаний определяется проектной документацией). 

Приложение № 5
АКТ
приемки результатов выполненных работ 
"___"_______________ 202__ г.
Объект капитального ремонта__________________________________________________
Комиссия по приемке выполненных работ,   назначенная приказом Генерального директора Фонда от _________ 202_ г. № _________, в составе:
Председателя комиссии - представитель Фонда ______________________________________________________________
и членов комиссии - представителей:
Подрядчика   ___________________________________________________________________________________________

Лица, осуществлявшего строительный контроль    ____________________________________________________________

Органа местного самоуправления муниципального образования   _______________________________________________

Собственников помещений в многоквартирном доме _________________________________________________________

Лица, осуществляющего управление многоквартирным домом _________________________________________________

Органа исполнительной власти Владимирской области, ответственного за реализацию региональной программы капитального ремонта и (или) краткосрочного плана ее реализации  _____________________________________________
           
УСТАНОВИЛА:
1. Подрядчиком предъявлены к приемке результаты выполненных  работ  по капитальному ремонту _______________________________________________________________________________________________________
2.  Проект и (или) сметная документация на капитальный ремонт разработана
_______________________________________________________________________________________________________
                  (указывается наименование организации)
"____"________________ 20_____ г.
и утверждена____________________________________________________________________________________________
                  (указывается наименование организации)
3. Выполнение работ осуществлено в сроки:
начало работ _____________________, окончание работ________________________
продолжительность капитального ремонта (месяцев, дней):
по норме или по плану______________________________________________________
фактически_________________________________________________________________
4. Сметная стоимость капитального   ремонта   по   утвержденной   сметной документации всего___________________тыс. руб.,
в том числе ремонтно-строительных работ__________________ тыс. руб.
Стоимость товарной строительной продукции________________ тыс. руб.
Стоимость оборудования___________________тыс. руб.
5. На основании осмотра предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома по адресу:_______________________________________ и ознакомления с соответствующей исполнительной документацией   рассматривается   вопрос  о  принятии  решения   о  приемке результатов выполненных работ.

Решение комиссии:
Результаты выполненных работ по капитальному ремонту ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________приняты (не приняты).⃰
    (указываются вид услуг и (или) работ и адрес многоквартирного дома)

Председатель комиссии: ___________   __________________________
                                                    (подпись) (расшифровка подписи)
Члены комиссии:

Подрядчик		_______________     ________________________
			              (подпись)  (расшифровка подписи)

Лицо, осуществлявшее строительный контроль ______________       _________________________
                                                                                              (подпись)  (расшифровка подписи)

Орган местного самоуправления      _____________       _______________________________________
                                                                              (подпись)  (расшифровка подписи)
Представитель собственников в многоквартирном доме   ________      __________________________________
                                                           (подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом ______        ________________________________
    				                                                (подпись) (расшифровка подписи)

ОСОБОЕ МНЕНИЕ ЧЛЕНА КОМИССИИ:
Я, ______________________________________, член комиссии по приемке выполненных работ настоящим выражаю особое мнение по вопросу выполнения работ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
В связи с изложенным, полагаю, что на объекте капитального ремонта необходимо:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________               _______________________________________
            (подпись)                                                     (расшифровка подписи

Приложение № 6

Техническое задание